어린나무가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행 기준

2020. 3.

어린나무가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행 기준

순     서

Ⅰ. 실행단계별 사업추진 요령	1

1. 사업계획서 작성	1

2. 어린나무가꾸기 설계	2

3. 어린나무가꾸기 사업	5

4. 어린나무가꾸기 감리	6

5. 어린나무가꾸기 준공	10

6. 설계변경을 통한 사업비의 정산처리 등	10

Ⅱ. 어린나무가꾸기 표준 작업방법 및 작업품셈	11

1. 공통적용	11

2. 공정별 작업방법과 작업품셈	12

Ⅲ. 어린나무가꾸기 품셈 적용기준	17

1. 기술업무 품셈	17

1.1 어린나무가꾸기 설계	17

1.2 어린나무가꾸기 감리	19

2. 기능분야 품셈	22

2.1 어린나무가꾸기	22

2.2 보조공정	23

2.2.1 작업로 설치	23

2.2.2 덩굴걷기	25

2.2.3 가지치기(수형교정)	26

[별첨] 사업계획서, 설계․감리․사업 산출내역서, 표준지 조사야장 등 예시

Ⅰ. 실행단계별 사업추진 요령

1. 사업계획서 작성

가. 작성주체와 시기

○ 사업계획서는 담당공무원이 작성함을 원칙으로 한다.

- 산림청 소관 국유림 : 산림청 또는 그 소속기관의 담당공무원

- 타 부처 소관 국유림, 공유림 및 사유림 : 산림 소재지의 시 · 군 · 구 담당공무원

○ 사업계획서는 기본설계서로 대체할 수 있다.

○ 사업계획서는 가급적 전년부터 사업 당해 연도 2월까지 작성한다.

나. 어린나무가꾸기 대상지 유형구분

어린나무가꾸기 사업에서 정의하는 조림지는 조림 성공지, 조림목 혼생지, 천연발생 활엽수림으로 대분류 한다. 조림성공지 및 조림목 혼생지의 어린나무가꾸기 대상지는 치수림과 유령림 단계로 구분하여 사업을 시행하며, 천연발생 활엽수림은 유령림 단계에서만 사업을 시행한다.

< 대상지 구분 >

(1) 조림성공지

○ 당초 식재본수 대비 50% 이상의 조림목이 생육하고 있는 조림지

(2) 조림목 혼생지

○ 조림목과 천연발생목이 혼효되어 있는 조림지이며, 우량대경재를 생산할 수 있는 산림으로, 조림목(유사수종 포함)이 당초 식재본수 대비 26∼49% 생육하고 있는 조림지

(3) 천연발생 활엽수림

○ 형질이 우수한 조림목은 없으나 천연발생목을 활용하여 우량대경재를 생산할 수 있는 산림으로, 조림목(유사수종 포함)이 당초 식재본수 대비 25% 이하로 생육하고 있는 조림지

* 치수림 단계의 조림실패지(식재본수 대비 25% 이하)는 벌채 후 재조림 등 검토

< 유형 구분 >

(1) 치수림 단계

○ 풀베기 후 3년 내외 경과한 조림지로 제거대상목이 조림목의 생장을 방해하고 있으며, 어린나무가꾸기를 처음으로 실시하는 지역

(2) 유령림 단계

○ 치수림 단계의 어린나무가꾸기를 실행한 후 3년 내외 경과한 지역으로 제거대상목이 조림목의 생장을 방해하고 있는 지역

○ 치수림 단계의 어린나무가꾸기작업을 실행하지 아니하였으나 조림목의 평균 흉고직경이 6㎝ 이상이면서 조림목과 수관경쟁을 하는 제거대상목의 피복도가 50% 이상인 지역

(3) 유령림 단계의 천연림보육

○ 조림지 중 형질이 우수한 조림목은 없으나 천연 발생목을 활용하여 우량대경재를 생산할 수 있는 지역

다. 어린나무가꾸기 대상지 선정

○ 산림경영계획이 편성된 지역과 기본설계가 작성된 지역은 산림경영계획 또는 기본설계에 의한다.

○ 산림경영계획 또는 기본설계가 작성되지 아니한 지역의 어린나무가꾸기 대상지는 담당공무원이 소반 또는 필지단위로 선정한다.

라. 사업계획서의 내용

○ 사업계획서에는 다음 내용이 포함되어야 한다.

- 사 업 명 : 시행하고자 하는 어린나무가꾸기 사업의 명칭

- 사업개요 : 대상지 위치, 유형별 사업면적, 사업계획 기간, 소요예산

- 대상지 특성 : 조림년도, 조림수종, 어린나무가꾸기 대상지 유형, 기반시설 등

- 사업시기 : 실시설계 시기, 사업시행 시기

- 작업방법 : 제거대상, 제거방법, 가지치기 본수와 높이, 작업로 설치 등

- 붙임자료 : 소반 또는 지번별 조서, 도면(1:25,000 이상 축적의 위치도)

2. 어린나무가꾸기 설계

가. 실시설계 작성주체와 시기

○ 어린나무가꾸기 실시설계는「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」제15조 제1항에서 정하는 바에 따른 자격을 갖추고 기술용역업을 등록한 업체 또는 담당공무원(국유림에 한함)이 작성한다.

○ 실시설계는 사업 전년부터 사업 당해 연도 10월까지 작성한다.

나. 조사도면 작성 및 현장 확인

(1) 수행순서와 내용

① 발주된 사업대상지를 도면으로 작성

② 현장 확인을 통해 작업이 불필요한 지역은 제외하고 어린나무가꾸기 사업이 필요한 지역만 대상지로 선정

③ 어린나무가꾸기 사업 대상지를 도면에 이기하고 사업면적을 확정

④ 향후 설계 진행방향을 담당공무원과 협의

- 대상지로 확정한 면적이 발주면적보다 적을 경우 → 추가대상지 제공 요청

- 추가대상지 확보가 곤란할 경우 → 실시설계비 조정  → 계약변경

(2) 소요인력

○ 조사도면 작성 및 현장 확인은 고급기술자 1인이 수행한다.

- 조사도면작성 및 현장 확인은 1인이 1일 50ha 수행 기준

○ 1ha당 소요인력 : 0.02인/ha

<소요인력>  1ha당

작업구분	소요인력	인력구분
조사도면 작성 및 현장 확인	0.02	고급기술자

다. 표준지조사

(1) 표준지 크기와 조사비율

○ 표준지 조사비율은 사업면적의 0.5%로 한다.

○ 표준지 크기는 100㎡(10m×10m 직방형 또는 반지름 5.67m 원형)로 한다.

(2) 표준지 배치 및 표시

○ 표준지는 사업대상지의 상, 중, 하에 고루 배치한다. 단, 2ha 이하로 독립된 대상지는 사업대상지 중앙부에 표준지를 배치한다.

○ 표준지 표시

- (직방형 표준지) 표준지 사각 모서리에 임업용 황색 마킹테이프(길이 0.5m)로 둘러서 표시

- (원형 표준지) 표준지 중앙부에 임업용 황색 마킹테이프(길이 1.0m) 2겹으로 둘러서 표시

(3) 표준지 조사내용

○ 표준지 위치 : GPS 좌표를 기록

○ 조 림 목 : 표준지 내에 있는 조림목(유사수종 포함)본수, 흉고직경, 수고, 가지치기 본수

○ 제거대상 : 제거대상목의 종류와 피복도

* 제거대상 피복도란 조림목 생장을 방해하는 자연발생목 중 조림목과 수관경쟁을 하는  교목성 수목이 점유하고 있는 공간비율을 육안으로 측정

○ 경사도, 집단화정도 등 할증요소를 조사한다.

(4) 소요인력

○ 표준지 설치 및 조사는 2인 1조(고급기술자 1인과 초급기술자 1인) 로 수행한다. 조사량은 1조가 1일 100㎡ 표준지 10개를 기준으로 한다.

○ 표준지 조사비율 0.5%(2ha당 표준지 1개소) 적용 시, 1일 1조가 조사할 수 있는 사업면적은 20ha 이다. 따라서 1ha당 소요인력은 0.05조로 산출된다.

<소요인력>  1조당

작업구분	소요인력	인력구분
표준지조사	0.05	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

(5) 소요재료

○ 표준지 조사비율 0.5%, 표준지 크기 100㎡, 1ha당 표준지 0.5개소

○ 표준지 1개소당 테이프 소요량 : 2.0m 적용

- 정방형 표준지 : 4개 모서리 × 0.5m = 2.0m

- 원형표준지 : 1.0m × 2겹 = 2.0m

○ 임업용 마킹테이프 1Roll은 75m

○ 1ha에 필요한 테이프 : 표준지당 2.0m × 0.5개 표준지 ÷ 75m = 0.013Roll

라. 설계도 · 서 작성

(1) 실시설계서 작성요령

○ 실시설계도 · 서 작성요령은 별첨 참고

○ 제출할 성과품에는 전자기록매체(CD 또는 USB)가 포함되어야 한다.

(2) 소요인력

○ 실시설계도 · 서는 고급기술자 1인이 작성한다.

○ 실시설계도 · 서 작성 소요인력은 1인 1일 20ha 작성기준

<소요인력>  1ha당

작업구분	소요인력	인력구분
설계도 · 서 작성	0.05	고급기술자

(3) 소요재료

○ 실시설계도 · 서는 5부 작성을 기본으로 하고 필요에 따라 가감할 수 있다.

○ 설계도 · 서 1부 자료유인비는 다음과 같이 적용한다.

- 설계서 20,000원/부

- 설계도면 10,000원/부

마. 작업자 교육

○ 작업자 교육은 실시설계 책임기술자가 실시함을 원칙으로 한다.

○ 교육내용에는 설계목적, 작업지 현황, 작업량과 작업방법 등이 포함되어야 한다.

○ 발주청은 실시설계 추진 전 반드시 작업자 교육에 대한 사항을 과업지시서에 포함하여 계약 추진을 하고 실시설계자는 발주청의 작업자대상 교육 요청 시 이에 응해야 한다.

바. 노무비 할증

○ 실시설계 시기 할증은 현장조사자의 산지 이동의 어려움 정도에 따라 다음과 같이 구분하여 적용한다. 단, 설계시기가 중간에 걸리는 경우 많은 쪽으로 적용한다.

<할증률>

실시설계 시기	할증률
1월∼5월	0%
10월∼12월	+5%
6월∼9월	+10%

3. 어린나무가꾸기 사업

○ 어린나무가꾸기 사업시행자는 실시설계서의 작업량과 작업방법에 따라 실행한다. 작업자 교육을 실시하기 전까지의 대상지의 현황, 설계방향, 작업방법 등에 대한 의문사항은 어린나무가꾸기사업 설계자에게 문의한다.

○ 어린나무가꾸기 작업 중 작업방법에 대한 자문과 작업량의 가 · 감은 감리자와 협의하여 진행한다.

○ 어린나무가꾸기 표준작업방법과 공종별 적용기준은 Ⅱ. 어린나무가꾸기 표준 작업방법을 참고한다.

4. 어린나무가꾸기 감리

가. 감리주체와 시기

○ 실시설계를 용역으로 시행하였을 경우에만 감리를 실시한다. 국가가 직접 설계, 즉 담당공무원이 설계를 한 경우에는 감리를 용역으로 실시하지 못한다.

* 국유림은 실시설계를 용역으로 시행하였더라도 필요에 따라 감리 용역 생략 가능

○ 어린나무가꾸기 사업의 감리는「산림기술진흥 및 관리에 관한 법률」제15조제1항에서 정하는 바에 따른 자격을 갖추고 기술용역업을 등록한 업체가 수행한다.

○ 감리 시기는 실시설계 용역 완료 전부터 사업 준공 후 15일 이내까지로 한다.

나. 설계서 검토

(1) 설계서 검토방법

○ 감리원은 어린나무가꾸기사업 설계도 · 서상의 오류 유 · 무를 확인하고 현장 확인을 통한 사업대상 현장이 어린나무가꾸기 작업이 필요한지 여부와 공종의 선택 등 작업방법이 적정한지 검토한다.

○ 다음의 경우는 설계서 검토를 생략할 수 있다.

- 감리 착수시기가 실시설계 검수시기보다 늦은 경우(전년도 사전 설계)

- 국가가 직접(담당공무원) 실시설계서를 검토하여 검수 처리한 경우

(2) 소요인력

○ 설계서 검토는 책임기술자(감리원)가 수행한다.

○ 설계서검토 소요인력은 고급기술자 1인 1일 50ha 검토 기준

<소요인력>  1ha당

작업구분	소요인력	인력구분
설계서 검토	0.02	고급기술자

다. 현장점검 및 작업지도

(1) 현장점검 · 지도 방법

○ 감리원은 어린나무가꾸기사업 시행중에 현장을 방문하여 작업사항을 점검하고 설계서대로 시행하지 아니한 경우나 사업이 잘못 시행되거나 작업내용이 불량할 경우에는 보완하도록 지도하여야 한다.

○ 감리원은 출장일별로 현장점검 및 작업지도 결과를 정리한 중간감리보고서와 감리일지를 발주처에 제출하여야 한다.

(2) 소요인력

○ 현장점검 및 작업지도는 고급기술자 1인이 수행한다.

○ 감리원이 현장 방문하여 1일 33ha를 점검 및 지도 기준

<소요인력>  1ha당

작업구분	소요인력	인력구분
현장점검 · 지도	0.03	고급기술자

라. 예비사업완료검사

(1) 예비사업완료검사 방법

○ 예비사업완료검사는 반드시 용역 착수 시 신고 된 감리원이 참여하여 2인 1조로 실시한다.

○ 감리원은 어린나무가꾸기 사업지 전 지역에 대하여 설계대로 작업이 실행되었는지 검사한다. 작업이 누락되었거나 잘못 실행된 지역은 보완작업을 지시하고 이행여부를 확인하여야 한다.

(2) 감리표준지 배치 및 조사방법 (유령림 단계만 적용)

○ 유령림 단계의 어린나무가꾸기 작업수량은 감리표준지를 배치하여 조사한다. 치수림 단계에서는 감리표준지 배치 및 조사공정을 생략한다.

○ 감리표준지 조사비율은 어린나무가꾸기 사업면적의 0.25% 이상으로 한다.

○ 표준지 크기는 100㎡(10m×10m 직방형 또는 반지름 5.67m 원형)로 한다.

○ 표준지표시

- (직방형 표준지) 표준지 네 모서리에 임업용 적색 마킹테이프로 둘러서 표시

- (원형 표준지) 표준지 중앙부에 임업용 적색 마킹테이프 2겹으로 둘러서 표시

(3) 감리표준지 조사내용

○ 감리표준지 위치 : GPS 좌표를 기록

○ 수량조사 : 잔존목 본수, 수고, 직경조사, 가지치기 본수와 높이 등

○ 작업품질조사 : 제거대상목 존치여부, 벌도 높이, 산물처리 상태 등

(4) 표준지 배치를 하지 않는 치수림 단계에 대한 예비사업완료검사 내용

○ 사업지 전 지역에 대하여 설계대로 작업이 실행되었는지 검사

○ 작업이 누락되었거나 잘못 실행된 지역은 보완작업을 지시하고 이행여부를 확인

(5) 소요인력

○ 작업 실행 여부와 작업품질 조사 : 2인 1조  1일 40ha 조사기준(0.025조/ha)

○ 감리표준지조사 : 2인 1조  1일 100㎡ 표준지 15개 조사기준

- 사업면적의 0.25% 조사 시 1일 60ha 조사, 1ha당 소요인력은 0.017조

○ 치수림 단계 : 작업 실행 여부와 작업품질만 조사 = 0.025조/ha

○ 유령림 단계 : 작업 실행 여부와 작업품질 + 표준지 조사 = 0.04조/ha

<소요인력>  1ha당

작업구분	소요인력	인력구분
예비사업완료검사 (유령림 단계)	0.04	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
예비사업완료검사 (치수림 단계)	0.025	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

(5) 소요재료

○ 감리표준지 조사비율 0.25%, 표준지 크기 100㎡, 1ha당 표준지 0.25개소

○ 표준지 1개소당 테이프 소요량 : 2.0m

- (원형표준지) 1.0m × 2겹 = 2.0m

- (직방형 표준지) 4개 모서리 × 0.5m = 2.0m

○ 임업용마킹테이프 1Roll은 75m

○ 1ha에 필요한 테이프 : 표준지당 2.0m × 0.25개 표준지 ÷ 75m = 0.007Roll

마. 감리보고서 작성

(1) 감리보고서 작성요령

○ 감리보고서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 감리완료보고서

- 필지별 또는 임 · 소반별 세부사업 실행내역서(면적)

- 임 · 소반별 사업시행 조사표

- 감리표준지 조사보고서

- 소반별 작업확인 조서

- 감리일지

- 감리 표준지 위치 정보가 포함된 감리완료도면과 검사 시 감리원 이동 동선이 확인되는 GPS트랙 도면

○ 사업시행자가 작성하는 안전점검에 관한 종합보고서에 대한 검토의견을 제출해야 한다.

○ 제출할 보고서에는 전자기록매체(CD 또는 USB)가 포함되어야 한다.

(2) 소요인력

○ 감리보고서는 고급기술자 1인이 작성한다.

○ 감리보고서 소요인력은 고급기술자 1인 1일 20ha 작성기준으로 산출

<소요인력>  1ha당

작업구분	소요인력	인력구분
감리보고서 작성	0.05	고급기술자

(3) 소요재료

○ 감리보고서는 사업시행 건당 2부 작성을 기본으로 하고 필요에 따라 가감 가능

○ 감리보고서 1부의 자료 유인비는 20,000원을 기준

바. 노무비 할증

○ 어린나무가꾸기 감리 노무비 할증은 현장점검 및 작업지도와 예비사업완료검사 공정에 적용한다.

○ 감리시기 할증은 현장조사자의 산지 이동의 어려움 정도에 따라 다음과 같이 구분하여 적용한다. 단, 감리시기가 중간에 걸리는 경우 많은 쪽으로 적용한다.

<할증률>

감리 시기	할증률
1월∼5월	0%
10월∼12월	+5%
6월∼9월	+10%

5. 어린나무가꾸기 준공

○ 어린나무가꾸기사업의 준공검사는 감리가 제출한 예비사업완료검사보고서를 참고하여 담당공무원이 수행한다.

○ 설계와 비교하여 사업면적과 작업량에 현저한 차이가 발생한 경우 설계변경 의뢰한다.

○ 감리보고서상 작업 미비점에 대하여는 조치 이행사항을 확인한다.

6. 설계변경을 통한 사업비의 정산 처리 등

○ 감리 착수 시기가 실시설계 검수 시기보다 늦어져 현장 확인 등 설계서 검토가 생략되거나 설계 시기의 경과에 따른 제거대상 작업량이 현저히 증가한 경우

* 전년도 설계, 봄철 설계 후 가을철 작업 시행 등

○ 기타 과다 또는 과소 설계에 따른 작업량의 증감차이가 현저하여 담당공무원, 감리원이 설계변경 등이 불가피하다고 인정하는 경우

Ⅱ. 어린나무가꾸기 표준 작업방법 및 작업품셈

1. 공통적용

가. 작업도구(기계장비)

○ 어린나무가꾸기 작업을 실행하는 기본 기계장비는 체인톱으로 한다.

○ 어린나무가꾸기 단계의 가지치기 도구는 전정가위, 손톱과 고지톱으로 한다.

나. 어린나무가꾸기 작업목표

(1) 치수림 단계

○ 인공조림지 : 조림목은 식재밀도가 낮으므로 제거하지 않음

* 침엽수 천연하종 갱신지의 경우도 인공조림지에 포함

○ 천연활엽수와 혼효지역

- 폭목은 제거

- 웃자란 나무로 형질이 우수한 경우에는 가지절단으로 생장 조절

- 침엽수는 피압 우려가 있으므로 최소 폭 4∼7m 되게 소군상으로 하여 단목으로 있는 활엽수는 제거

- 활엽수는 가능한 밀생 상태로 유지시킴

- 활엽수 조림지는 쌍간지가 되지 않도록 수형교정 실시

○ 천연발생 활엽수림

- 폭목은 제거

- 맹아목은 목표 활엽수에 피해를 주지 않을 경우에는 적정밀도가 유지되도록 맹아지의 일부를 솎아냄

(2) 유령림 단계

○ 침엽수 조림목은 1차 간벌시기까지 피해목 등 특별한 경우를 제외하고는 솎아내지 않는다.

○ 활엽수 조림목은 수고생장 촉진 및 수간이 통직한 나무로 유도하기 위해 높은 밀도로 관리한다.

○ 활엽수 맹아목은 우수한 개체 1∼2본을 남기고 나머지는 제거하며, 동시에

폭목과 형질불량목은 제거한다.

2. 공정별 작업방법과 작업품셈

가. 작업로 설치

(1) 표준 작업방법

○ 작업로 간격은 20∼50m로 하되 도로 또는 임도에서 50m 이내에 작업지 접근이 가능한 경우에는 생략 가능하다. 작업로 간격이 50m일 경우 ha당 작업로 길이는 200m이다.

○ 작업로 폭은 1.5m로 하며 작업자와 관리자 이동에 지장이 없도록 지면에 가깝게 벌도한다.

(2) 소요인력 및 할인 · 할증

○ 작업로 설치 소요인력은 숲가꾸기 품셈 적용기준의 작업로 설치(소작업로) 품을 적용하되 인력구성은 특별인부 50%, 보통인부 50%로 변경하여 적용한다.

○ 할인 · 할증요소는 해당 품셈의 할인 · 할증률 적용한다.

나. 치수림 단계 작업

(1) 표준 작업방법

○ 제거 대상목은 보육 대상목의 생장에 지장을 주는 유해수종(조림목과 수관경쟁을 하는 천연발생 활엽수), 덩굴류, 피해목과 폭목으로 한다.

○ 제거 대상목의 제거부위는 조림목 수고의 1/2 이하로 한다.

○ 침엽수림 작업방법

- 침엽수를 피압시키는 활엽수 맹아목은 제거한다.

- 침엽수림에 유용 활엽수가 30% 이내의 비율로 혼효 시는 소군상으로 혼효시키도록 하고 희귀 활엽수가 있을 시는 보호한다.

○ 활엽수는 다음과 같이 수형을 교정한다.

- 쌍줄기가 있을 시는 하나를 제거한다.

- 가지가 한편으로 자랄 시 지나치게 무성하여 폭목으로 자랄 위험이 있는 경우에는 가지를 제거한다.

- 맹아목이 지나치게 밀생 시 1∼2본 남기고 나머지는 중간부위를 절단한다.

○ 조림목을 대체할 수 있는 수종은 유사수종으로 한다.

(2) 소요인력

○ 치수림 단계의 어린나무가꾸기 작업에 소요되는 인력품은 5.0인/ha 을 적용

○ 작업로 설치와 덩굴제거가 필요한 경우 추가하여 적용

(3) 소요재료

○ 체인톱용 휘발유 : 산출된 특별인부(인) × 5.6ℓ × 휘발유가격

○ 잡품 : 주연료비의 95%

(4) 기계손료

○ 기계손료 = 산출된 특별인부(인) × 0.0084(손료계수) × 체인톱가격

(5) 할인 · 할증

○ 경사도 : 완(0%), 중(+5%), 급(+10%)

○ 집단화정도 : 3ha이상(0%), 1∼3ha미만(+5%), 1ha 미만(+10%)

○ 제거대상 피복도 : 소(-20%), 중(0), 밀(+20%)

○ 작업계절 : 5월, 10월∼11월(0%), 6월∼9월(+10%)

다. 유령림단계 작업방법

(1) 표준 작업방법

○ 조림목 생장에 지장을 주는 유해수종(조림목과 수관경쟁을 하는 천연 활엽수)과 피해를 입거나 고사한 조림목만 제거한다.

○ 제거 대상목의 제거부위는 지표면에 가깝게 한다.

○ 밀생된 침엽수림

- 정상적인 풀베기와 1차 어린나무가꾸기를 실시한 지역은 1차 간벌시기까지 조림목을 제거하지 아니한다.

- 천연갱신 등으로 밀생된 침엽수림은 2본당 1본 비율로 솎아낸다.

○ 활엽수 단순림

- 폭목, 굽은 나무, 피해목, 기운나무 등 형질불량목을 제거한다.

- 맹아목의 경우는 형질 우량 줄기 1∼2본을 남기고 나머지는 제거한다.

- 임분밀도는 밀생상태로 유지시킨다.

○ 침 · 활 혼효림

- 침엽수와 활엽수를 소군상(폭 7∼15m)되게 혼효 유도한다.

- 활엽수 중 희귀목, 풍치수는 단목으로도 남기도록 한다.

- 활엽수림에 침엽수가 단목으로 자랄 경우 존치. 침엽수가 희귀수종일 경우에는 충분한 공간을 주도록 한다.

(2) 소요인력

○ 유령림 단계의 어린나무가꾸기 작업에 소요되는 인력품은 6.0인/ha 을 적용

○ 작업로 설치와 덩굴제거가 필요한 경우 추가하여 적용

(3) 소요재료

○ 체인톱용 휘발유 : 산출된 특별인부(인) × 5.6ℓ × 휘발유가격

○ 잡품 : 주연료비의 95%

(4) 기계손료

○ 기계손료 = 산출된 특별인부(인) × 0.0084(손료계수) × 체인톱가격

(5) 할인 · 할증

○ 경사도 : 완(0%), 중(+5%), 급(+10%)

○ 집단화정도 : 3ha이상(0%), 1∼3ha미만(+5%), 1ha 미만(+10%)

○ 제거대상 피복도 : 소(-20%), 중(0), 밀(+20%)

○ 작업계절 : 1월∼5월과 10월∼12월(0%), 6월∼9월(+10%)

라. 유령림 단계의 천연림 작업방법

(1) 표준 작업방법

○ 과다한 임지노출이 우려될 경우를 제외하고 형질이 불량한 나무, 병해충 피해목과 폭목은 모두 제거한다.

○ 칡, 다래 등 보육대상목 생장에 지장을 주는 덩굴류는 모두 제거한다.

○ 움싹이 발생되었을 경우, 각 근주에서 생긴 움싹은 2본정도 남기고 정리하며, 유용한 실생묘는 존치한다.

○ 제거하지 않는 나무 중 쌍가지로 자란 경우 하나는 잘라주고, 원형수관은 원추형으로 유도한다.

○ 제거목대상목의 제거부위는 지표면에 가깝게 한다.

(2) 소요인력

○ 유령림 단계의 천연림 작업에 소요되는 인력품은 6.0인/ha 을 적용

○ 작업로 설치와 덩굴제거가 필요한 경우 추가하여 적용

○ 소요재료, 기계손료, 할인 · 할증은 유령림 단계의 어린나무가꾸기와 동일하게 적용

마. 가지치기

(1) 표준 작업방법

○ 치수림 단계에서는 가지치기를 원칙적으로 실시하지 않는다.(단, 수형교정을 위한 활엽수 가지치기의 경우는 예외로 함.)

○ 어린나무가꾸기 작업과 가지치기를 함께 할 수 있으나 가지치기를 별도의 작업으로 실행할 수 있다.

○ 가지치기 적용대상 수종은 소나무, 잣나무, 낙엽송, 전나무, 해송, 삼나무, 편백 등으로 한다.

○ 가지치기 본수는 “지속가능한 산림자원관리지침, 별표 2. 수종별 시업기준”에서 정하고 있는 잔존본수의 50% 이하로 제한한다.

○ 가지치기 높이는 으뜸가지 이하로 한다.

(2) 소요인력

○ 숲가꾸기 품셈 적용기준의 가지치기 품을 적용하되 가지치기 높이가 1m 미만의 경우도 있으므로 0∼0.5m와 0.5∼1.0m 구간을 신설하여 적용한다.

-  0∼0.5m와 0.5∼1.0m 구간의 가지치기 품은 0∼1m 구간 품의 약 50%를 적용한다.

(3) 할인 · 할증

○ 숲가꾸기 품셈 적용기준 중 가지치기 품셈의 할인 · 할증률 적용한다.

바. 활엽수 수형교정

	① 어린 활엽수가 독립수 또는 밀도가 낮은 곳에 자랄시 나타나는 모습이다. 폭목으로 자라게 되므로 수형교정이 필요하다. ② 쌍줄기가 역지로 자라기 전에 절단을 시키면 옆 그림과 같이 교정이 된다.

	③ 쌍줄기로 자라기 전에 줄기교정을 하여주면 장차 곧게 자란다. ④ 작업 시기는 5월말이나 6월초 등 줄기성장이 왕성한 시기가 적합하다.

(1) 표준 작업방법

○ 활엽수 수형교정은 조림성공지 치수림 단계에서만 실시한다.

○ 활엽수 수형교정 방법은 위 사례를 참고하여 실행한다.

(2) 소요인력

○ 활엽수 수형교정은 숲가꾸기 품셈 적용기준의 가지치기 품을 적용하되 수형교정을 하는 구간의 높이를 가지치기 높이로 반영한다.

※ 예) 수형교정 대상 활엽수의 수고가 2m, 수형교정 구간은 1∼2m 일 경우 가지치기 품은 활엽수 가지치기 품(0.3인–0.2인=0.1인/100본)을 적용

(3) 할인 · 할증

○ 숲가꾸기 품셈 적용기준 중 가지치기 품셈의 할인 · 할증률 적용한다.

Ⅲ. 어린나무가꾸기 품셈 적용기준

1. 기술업무 품셈

1.1 어린나무가꾸기 설계

1.1.1 조사도면 작성 및 현장 확인

가. 소요인력(1ha당)

(단위 : 인)

작업구분	소요인력	인력구분
조사도면 작성 및 현장 확인	0.02	고급기술자

《참고》

o 본 품은 조사도면 작성, 사업 부적합지를 제외시키기 위하여 실행하는 현장조사를 포함한다.

o 조사도면 작성 및 현장 확인 품은 고급기술자 1인이 1일 50ha 작성 및 확인기준

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
실시설계 시기	1월∼5월	0%
	10월∼12월	+5%
	6월∼9월	+10%

《참고》할증은 계절에 따라 현장조사자 이동 및 작업조건이 달라지므로 설계시기에 따라 할증 적용

1.1.2 표준지 조사

가. 소요인력(1ha당)

(단위 : 조)

작업구분	소요인력	인력구분
표준지조사	0.05	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

《참고》

o 표준지조사는 1조가 1일 100㎡ 표준지는 10개 조사기준으로 산출

o 표준지조사비율은 0.5% 적용

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
실시설계 시기	1월∼5월	0%
	10월∼12월	+5%
	6월∼9월	+10%

《참고》할증은 계절에 따라 현장조사자 이동 및 작업조건이 달라지므로 설계시기에 따라 할증 적용

다. 소요재료(1ha당)

작업구분	재료비		비고
	주재료	수 량
표준지조사	임업용 마킹테이프(황색)	0.013 Roll	0.5% 조사

《참고》

o 직방형 표준지는 표준지 사각 모서리에 1겹으로 표시 기준

o 원형 표준지는 표준지 중앙부에 2겹으로 둘러서 표시 기준

1.1.3 설계도 · 서 작성

가. 소요인력(1ha당)

(단위 : 인)

작업구분	소요인력	인력구분
설계도 · 서 작성	0.05	고급기술자

《참고》본 품은 고급기술자 1인 1일 20ha 작성기준으로 산출

나. 소요재료(용역건당)

구 분	적용기준	비 고
자료 유인비	- 사업시행건별 5부 기본 작성 - 필요시 부수 추가 가능	설계도 · 서 1부당 30,000원 기준

《참고》설계서 20,000원/부, 설계도면 10,000원/부 기준으로 산출

1.2 어린나무가꾸기 감리

1.2.1 설계서 검토

가. 소요인력(1ha당)

(단위 : 인)

작업구분	소요인력	인력구분
설계서 검토	0.02	고급기술자

《참고》

o 본 품은 설계도 · 서상의 오류 유 · 무 검토와 사업대상 현장이 어린나무가꾸기 작업이 필요한지 여부에 대한 현장 확인을 포함한다.

o 설계서검토는 고급기술자 1인 1일 50ha 조사 기준으로 산출한 것이다.

1.2.2 현장점검 및 작업지도

가. 소요인력(1ha당)

(단위 : 인)

작업구분	소요인력	인력구분
현장지도 · 점검	0.03	고급기술자

《참고》

o 본 품은 어린나무가꾸기 작업방법과 작업품질 등을 점검하여 잘못된 부분은 보완하고 사전 보완 조치사항에 대한 이행 여부를 점검ㆍ지도 하는데 소요되는 품이다.

o 본 품은 감리원이 현장 방문하여 1일 33ha 점검 및 지도를 기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
감리 시기	1월∼5월	0%
	10월∼12월	+5%
	6월∼9월	+10%

《참고》할증은 계절에 따라 감리원의 이동 및 현장작업지도 조건이 달라지므로 감리시기에 따라 할증 적용

1.2.3 예비사업완료검사

가. 소요인력(1ha당)

(단위 : 조)

작업구분	소요인력	인력구분
예비사업완료검사 (유령림 단계)	0.04	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
예비사업완료검사 (치수림 단계)	0.025	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

《참고》

o 유령림 단계의 품은 어린나무가꾸기 작업실행지 검사와 사업면적의 0.25% 이상의 감리표준지를 조사하는데 소요되는 품이다.

o 감리표준지조사는 1조(고급기술자 1인, 초급기술자 1인)가 1일 100㎡ 표준지는 15개를 조사기준으로 산출한 것이다.

o 치수림 단계의 품은 어린나무가꾸기 작업실행지 작업실행 여 · 부와 작업품질을 검사하는데 소요되는 품이다.

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
감리 시기	1월∼5월	0%
	10월∼12월	+5%
	6월∼9월	+10%

《참고》할증은 계절에 따라 감리원의 이동 및 사업완료검사 조건이 달라지므로 감리시기에 따라 할증 적용

다. 소요재료(1ha당)

재료명	재료비		비고
	주재료	적용기준
테이프	0.007Roll	o 임업용 적색 마킹테이프 사용	0.25%

《참고》

o 직방형 표준지는 표준지 사각 모서리에 1겹으로 표시 기준

o 원형 표준지는 표준지 중앙부에 2겹으로 둘러서 표시 기준

1.2.4 감리보고서 작성

가. 소요인력(1ha당)

(단위 : 인)

작업구분	소요인력	인력구분
감리보고서 작성	0.05	고급기술자

《참고》

o 본 품은 사업실행면적 확정, 감리표준지 조사결과 정리, 감리보고서 작성과 감리완료도면 작성에 소요되는 품이다.

o 본 품은 고급기술자 1인 1일 20ha 작성기준으로 산출

나. 소요재료(용역건당)

구 분	적용기준	비 고
자료 유인비	- 사업시행건별 2부 기본 작성 - 필요시 부수 추가 가능	감리보고서 1부당 20,000원 기준

2. 기능분야 품셈

2.1 어린나무가꾸기

가. 소요인력

구 분	사용도구	단위	소요인력	인력구분
치수림 단계	체인톱	인/ha	5.00	특별인부 50% 보통인부 50%
유령림 단계	체인톱	인/ha	6.00	특별인부 50% 보통인부 50%
천연림보육 (유령림 단계)	체인톱	인/ha	6.00	특별인부 50% 보통인부 50%

《참고》소요인력은 체인톱 사용 인력 품으로 가지치기, 수형교정은 별도

나. 할인․할증요소

구 분	내 용	할증률
경사도	완(15° 이하)	0%
	중(15°～30°)	+5%
	급(30° 초과)	+10%
집단화 정도	밀집(개소당 3ha 이상)	0%
	보통(개소당 1∼3ha 미만)	+5%
	분산(개소당 1ha 미만)	+10%
작업시기	1월∼5월, 10월∼12월	0%
	6∼9월	+10%
제거대상 피복도	소(임지의 40% 이하 분포)	-20%
	중(임지의 41%∼70% 분포)	0%
	밀(임지의 71% 이상 분포)	+20%

《참고》

o 집단화정도는 사업면적÷개소수로 산출

- 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 개소로 적용

※ 예) 사업면적 50ha, 25개소일 경우, 50ha÷25개소 = 2ha/개소로 5% 할증을 적용

o 제거대상 피복도는 조림목에 방해되는 천연발생목의 피복도를 말함

제거대상목은 조림목과 수관경쟁을 하는 천연발생 교목성 수목을 말함

다. 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준
			적용비율	적용내역
체인톱 (휘발유)	5.6	95%	50%	1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용

《참고》

o 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일1대당(2인1조) 소요량 5.6ℓ의 50% 적용

o 주연료(잡품)의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안하여 적용

o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

※ 예) 6.0명/ha 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%)/인 × 6.0명/ha × 50%

라. 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준
		적용비율	적용내역
45cc(배기량기준)	0.0084	50 %	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용 o 손료계수×체인톱가격×인원×50%

《참고》

o 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일1대당 (2인1조) 손료계수 0.0084의 50% 적용

o 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

※ 예) ha당 6명 인력소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 6명/ha × 50%

2.2 보조 공정

2.2.1 작업로 설치

가. 소요인력(1km당)

(단위 : 인)

구 분	사용도구	소요인력	인력구성
작업로	체인톱	2.0	특별인부 50% 보통인부 50%

《참고》

o 작업로 설치는 작업자와 관리자 이동에 지장이 없도록 지면에 가깝게 장해물을 제거하는 작업임

o 작업로는 폭 1.5m 내외로 1㎞ 설치하는 품임

나. 할인․할증요소

구분	내용	할인․증률
경사도	완(15° 이하)	0
	중(15°～30°)	+5%
	급(30° 초과)	+10%
제거대상 식생	쉽다(높이 1.2m 미만이고, 낫으로도 제거가 용이)	-10%
	보통이다(높이 1.2m 이상이고, 직경이 4～6cm 미만)	0%
	어렵다(높이 1.2m 이상이고, 직경이 4～6cm 이상)	+10%

다. 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준
			적용비율	적용내역
체인톱 (휘발유)	5.6	95%	50%	1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용

《참고》

o 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일1대당(2인1조) 소요량 5.6ℓ의 50% 적용

o 주연료(잡품)의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안하여 적용

o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

※ 예) 6.0명/ha 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%)/인 × 6.0명/ha × 50%

라. 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준
		적용비율	적용내역
45cc(배기량기준)	0.0084	50%	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용 o 손료계수×체인톱가격×인원×50%

《참고》

o 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일1대당 (2인1조) 손료계수 0.0084의 50% 적용

o 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

※ 예) 2명/km 인력소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 2명/km × 50%

2.2.2 덩굴걷기

가. 소요인력

구 분	사용도구	단위	소요인력	인력구분
기계작업	예취기	인/ha	3.30	특별인부

《참고》

o 본 품은 예취기로 1ha의 지상부 덩굴을 모두 제거하는데 소요되는 품이다.

o 본 품은 덩굴로 피복된 지역만 구획하여 적용한다.

나. 할인․할증요소

구분	내 용	할증률
경사도	완(15° 이하)	0%
	중(15° 30°)	5%
	급(30° 초과)	10%
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1∼3ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	10%
작업시기	1∼5월	0%
	10월∼12월	5%
	6월∼9월	10%
덩굴 피복도	과밀(80%이상 피복)	50%
	밀(60∼80% 피복)	20%
	보통(40∼60% 피복)	0%
	소(20∼40% 피복)	-20%
	과소(20%이하피복)	-50%

《참고》

o 집단화정도는 사업면적÷개소수로 산출

- 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 개소로 적용

※ 예) 사업면적 50ha, 25개소일 경우, 50ha÷25개소 = 2ha/개소로 5% 할증을 적용

o 덩굴 피복도는 지표면을 덩굴로 덮고 있는 정도를 조사하여 적용

다. 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준
예취기 (휘발유)	5.0	10%	o 1대당 1인 작업

《참고》

o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

※ 예) 3.3대/ha 소요 : (휘발유 : 5.0ℓ + 잡품 : 주연료비 10%) × 3.3대/ha

라. 기계손료

기계명 (규격)	손료계수 (1일 1대당)	적용기준
예취기 (배기량 35cc)	0.0084	o 1대당 1인 작업 o 기계손료 = 손료계수 ×예취기가격×인원

《참고》

o 기계손료는 해당 장비가격에 대하여 적용하며, 장비가격은 공장도가격 및 수입가격을 적용

o 기계손료에는 감가상각비, 정비비 및 관리비가 포함되어 있음

※ 기계손료 산출 예) 0.0084 × 예취기가격 × 3.3대/ha

2.2.3 가지치기(수형교정)

가. 소요인력(100본당)

(단위 : 인/100본)

가지치기 높이	소나무 낙엽송	잣나무 리기다 (기타침엽수)	편백	활엽수	인력구분
0～0.5m	0.1	0.1	0.2	0.1	보통인부
0.5～1m	0.2	0.3	0.3	0.1
0～1m	0.3	0.4	0.5	0.2
0～2m	0.6	0.8	1.0	0.3
0～4m	1.4	1.8	2.2	0.7
0～6m	2.4	3.0	3.6	2.2
2～4m	0.8	1.0	1.2	0.4
2～6m	1.8	2.2	2.6	0.9
4～6m	1.0	1.2	1.4	0.5

《참고》

o 수형교정은 수형교정을 하는 구간의 높이를 가지치기 높이로 반영

※ 예) 수형교정 대상 활엽수의 수고가 2m, 수형교정 구간은 1∼2m 일 경우 수형교정 품은 활엽수 가지치기 품(0.3인 – 0.2인 = 0.1인/100본)을 적용

나. 할인․할증요소

구분	내 용	할인․증률
경사도	완(15° 미만)	0
	중(15～30°)	+5%
	급(30° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본․관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본․관목	0
	가슴높이 이상의 초본․관목	+10%

<별첨 1>

어린나무가꾸기 사업계획서(예시)

□ 사 업 명 : 2020년 어린나무가꾸기사업(00지구)

□ 사업개요

○ 위    치 : 00시 · 군 00읍 · 면 · 동 00리 00번지외 00필지(00임반 00소반)

○ 사업면적 : 50.00ha(치수림 단계 30.00ha,  유령림 단계 20.00ha)

○ 사업계획 기간 : 2020년 05월 ∼ 2020년 11월

○ 사업예산 : 80,000천원

□ 대상지 특성

○ 치수림 단계 어린나무가꾸기 대상지는 2014년 편백 2-0 용기묘 조림지로 2016년까지 풀베기 실시한 지역임

- 조림목과 수관경쟁(수고의 70% 이상)을 하는 천연발생 활엽수가 50%이상 피복되어 있음

○ 유령림 단계 어린나무가꾸기 대상지는 2010년 소나무 2-0 용기묘 조림지로 2016년 치수림 단계의 어린나무가꾸기작업을 실시한 지역임

- 천연발생 활엽수와 칡덩굴이 조림목 생장을 방해하고 있음

- 소나무 고사지가 발생하여 일부 제거가 필요함

○ 사업지는 분산되어 있으나 주변에 농로, 임도 등이 있어 접근성 양호함

□ 작업방법

○ 치수림 단계는 조림목과 수관경쟁(조림목 수고의 70% 이상)을 하는 천연발생 활엽수만 제거. 제거대상목의 제거부위는 조림목 수고의 1/2 이하로 함

○ 유령림 단계는 조림목 생장에 지장을 주는 활엽수와 피해를 입은 조림목을 제거하되 제거부위는 지표면에 가깝게 함

○ 가지치기는 유령림 단계만 실시하고 ha당 700본 이내(0∼1m 높이)로 실시

○ 칡덩굴제거는 피복면적을 측정하여 해당면적만 지상부 덩굴걷기 적용

□ 붙임자료

○ 사업대상지 목록(소재지, 지적, 사업면적, 사업이력, 소유자현황)

○ 사업지 도면(조림지관리 실시설계를 실시한 경우는 납품한 디지털도면. 설계도면이 없는 경우는 디지털지적도와 1/5,000 대상지 종이도면)

□ 작성일 및 작성자 :  2020년  월  일  작성자 OOO □   확인자 OOO □

<별첨 2>

어린나무가꾸기 실시설계비 산출내역서(예시)
사업면적			50.0 ha							개소			충남 서산시 00면 00리 산00
구분		항 목	수 량		품					단 가					할증	금 액
			(면적,수량)		인원,수량,요율					(금 액)
				단위				단위				종류
		조사도면작성 및 현장확인	50.0	ha	0.02			인/ha		224,376		고급기술자				224,376
		표준지 조사														947,075
		- 고급기술자	50.0	ha	0.05			인/ha		224,376		고급기술자			0%	560,940
		- 초급기술자	50.0	ha	0.05			인/ha		154,454		초급기술자			0%	386,135
		설계도작성	50.0	ha	0.05			인/ha		224,376		고급기술자				560,940
		소계														1,732,391
직접경비		재료유인비	1.0	건	5.00			부/건		30,000		설계도.서				150,000
		임업용 테이프	50.0	ha	0.013			Roll/ha		4,000		표준지표시				2,600
		소계														152,600
제경비			직접인건비 × 110%													1,905,630
기술료			(직접인건비 + 제경비) × 20%													727,604
순원가			직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료													4,518,225
손해배상 공제보험			1단계 공제료			36,869			2단계 공제료				7,229			44,098
총원가			순원가 + 손해배상 공제보험료													4,562,323
부가가치세			총원가 × 10%													456,232
합계																5,018,555
※ 엔지니어링 기술부문별 기술자 노임단가는 당해년도 기타부문 적용
Ο 할인·할증률 산정
	구 분		할증요소				단위작업 (%)										비 고
							표준지조사
	실시설계 시기		4월~5월				0%

<별첨 3>

어린나무가꾸기 감리용역비 산출내역서(예시)
사업면적			50.0 ha								개소				충남 서산시 00면 00리 산00
치수림 단계			30.0 ha								유령림 단계					20.0 ha
구분		항 목	수량			품					단가					할증	금 액
			(면적,수량)			인원,수량,요율					(금 액)
				단위				단위					종류
직접인건비		설계서검토	50.0	ha		0.02		인/ha			224,376		고급기술자				224,376
		현장지도·점검	50.0	ha		0.03		인/ha			224,376		고급기술자			0%	336,564
		예비사업완료검사															587,187
		Ο 치수림 단계															284,123
		- 고급기술자	30.0	ha		0.025		인/ha			224,376		고급기술자			0%	168,282
		- 초급기술자	30.0	ha		0.025		인/ha			154,454		초급기술자			0%	115,841
		Ο 유령림 단계															303,064
		- 고급기술자	20.0	ha		0.04		인/ha			224,376		고급기술자			0%	179,501
		- 초급기술자	20.0	ha		0.04		인/ha			154,454		초급기술자			0%	123,563
		감리보고서 작성	50.0	ha		0.05		인/ha			224,376		고급기술자				560,940
		소계															1,709,067
직접경비		재료유인비	1.0	건		2.00		부/건			20,000	감리보고서					40,000
		임업용 테이프	50.0	ha		0.007		Roll/ha			4,000	표준지표시					1,400
		소계															41,400
제경비			직접인건비 × 110%														1,879,973
기술료			(직접인건비 + 제경비) × 20%														717,808
순원가			직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료														4,348,248
손해배상 공제보험			1단계 공제료				36,221		2단계 공제료					6,957			43,178
총원가			순원가 + 손해배상 공제보험료														4,391,426
부가가치세			총원가 × 10%														439,142
합계																	4,830,568
※ 엔지니어링 기술자 노임단가는 당해연도 기타부문 적용
Ο 할인·할증률 산정
	구 분		할증요소		단위작업 (%)												비 고
					현장지도·점검								예비사업완료검사
	감리 시기		9월~11월		0%								0%

<별첨 4>

어린나무가꾸기 단가산출서(예시)
ha당 단가산출서
위치 및 면적		00/1소반
구분		작업량			단위품			소요픔		단가			할인		계
					(인원,수량,요율)								·
	단위작업			단위			단위				종류		할증
	Ο 어린나무가꾸기
	- 직접노무비	1.0		ha				6.00		142,932	특별인부0.5 보통인부0.5		15%		986,230
	치수림단계			ha	5.00		인/ha	-		155,599	(특별인부)
	유령림단계	1.0		ha	6.00		인/ha	6.00		130,264	(보통인부)
	재료비(체인톱)
	연료	3.00		대/ha	5.60		ℓ	16.80		1,270	휘발유(ℓ)				21,336
	잡품	21,336		원	95		%								20,269
	기계경비(체인톱)	3.00		대/ha	0.0084		1대2인			840,000	엔진톱(대)				21,168
	Ο 가지치기
	(잣나무 0~1m)
	직접노무비	500		본/ha	0.40		인/100본	2.00		130,264	보통인부		15%		299,607
합계	순 원 가														1,348,610
	Ο 직접노무비														1,285,837
	Ο 재료비														41,605
	Ο 경비(기계경비)														21,168
	Ο 할인·할증률 산정		00/1소반
	구 분		할인·할증요소			단위작업 (%)								비 고
						경계표시			어린나무 가꾸기			가지치기
	Ο 경사도		중			5			5			5
	Ο 집단화정도		분산						10
	Ο 제거대상피복도		중						0
	Ο 작업시기		9~11월						0
	Ο 장애물의 정도		가슴높이 이상									10
	Ο 합 계					5			15			15

<별첨 5>

어린나무가꾸기 설계표준지 조사야장(서식)
기본정보
소 재 지	충남 서산시 해미면 황락리 산36 ( 임반 소반)
조사일자	2020. 00. 00			조사자	000 외 1인
표준지 No.	1	표준지 크기		10m×10m(○), 5.67m원형( )
GPS좌표	X = / Y = (좌표계 : WGS84, 원점 : 중부 )
사업유형	치수림 단계( ), 유령림 단계(○)
표준지 조사내용
조림수종	조 림 목			가지치기		비 고
	경급	본수	수고(m)	본수	높이(m)
잣나무	2㎝미만
	2㎝
	4㎝	5	2/2-3	1
	6㎝	3	3/2-4	2
	8㎝	3	4/3-5	2
	10㎝이상
	계	11	3/2-5	5	0-1
* 조림목에는 유사수종을 포함한다.
할인 · 할증요소
구 분	내 용				할증률	조사결과
경사도	완(15° 이하)				0%
	중(15°∼30°)				+5%	○
	급(30° 초과)				+10%
집단화 정 도	밀집(개소당 3ha 이상)				0%
	보통(개소당 1∼3ha 미만)				+5%
	분산(개소당 1ha 미만)				+10%	○
제거대상 피 복 도	소(임지의 40% 이하 분포)				-20%
	중(임지의 41 %∼70% 분포)				0%	○
	밀(임지의 71% 이상 분포)				+20%

<별첨 6>

어린나무가꾸기 감리표준지 조사야장(서식)
기본정보
소 재 지	충남 서산시 해미면 황락리 산36 ( 임반 소반)
조사일자	2020. 00. 00			조사자	000 외 1인
표준지 No.	1	표준지 크기		10m×10m(○), 5.67m원형( )
GPS좌표	X = / Y = (좌표계 : WGS84, 원점 : 중부 )
사업유형	치수림 단계( ), 유령림 단계(○)
작업수량
잔존목			제거목			가지치기 본수
주 수종	경급	본수	주 수종	경급	본수
	2㎝미만			2㎝미만
	2㎝			2㎝
	4㎝			4㎝
	6㎝			6㎝
	8㎝			8㎝
	10㎝이상			10㎝이상
	계			계
작업품질
조사결과	벌목조재	양호( ), 불량( ), 누락( )
	가지치기	양호( ), 불량( ), 누락( )
불량사유	벌목조재
	가지치기